별첨 1

경기복지미래재단 사무실 환경개선

(리모델링) 공사 제안요청서

2009. 12. 15.

목    차

Ⅰ. 과업 개요	3

1. 과업(사업)명	3

2. 위치	3

3. 사업기간	3

4. 사업규모	3

5. 사업목적	3

6. 주요사업(과업)내용	3

Ⅱ. 일반 사항	4

Ⅲ. 과업수행 세부지침	16

1. 과업수행 기본 방향	15

2. 사무실 공간 구성(안)	16

Ⅳ. 서 식	19

○ 보안각서(제1호 서식)	19

○ 보안각서(제2호 서식)	20

○ 설계 실명제 준수각서(제3호 서식)	21

I		과업 개요

1. 과 업 명 : 경기복지미래재단 사무실 환경개선(리모델링)공사

2. 위    치 : 경기문화재단 2층(現 전시실)

9층(現 사무실, 교육장)

※ 수원시 팔달구 인계동 1116-1

3. 사업기간 : 계약일로부터 30일(설계 5일, 시공 25일)

4. 사업규모 : 2층 - 574.6㎡(174평), 9층 - 265.1㎡(80평)

가. 사업범위 : 사무실, 교육장 디자인 및 기본설계(실시설계),

시설물철거, 시공, 폐기물처리비 등

나. 사 업 비 : 70,000천원

5. 사업목적

가. 재단 조직확대로 인해 사무공간 협소등의 이유로 분리되어

있던 사무실을 업무의 효율성을 극대화하기 위해 통합사무실

환경으로 개선

나. 디자인과 인테리어, 색상, 공간 구조가 조화를 이루는 전국          최고의 교육장 환경 조성으로 교육연수의 질적 향상 도모

6. 주요 사업(과업)내용

가. 사무실 출․입구(3개소), 바닥 및 벽면 인테리어 설계․시공(2층)

나. 업무처리 부서별 공간 디자인․인테리어 설계․시공(2층)

다. 임원실 공간 디자인․인테리어 설계 및 시공(2층)

⇒ 이사장실 1, 대표이사실 1, 사무처장실 1, 정책연구실장실 1

라. 국제세미나실 및 강사 대기 공간 디자인 설계 및 시공(9층)

마. 행정사무 및 연구업무 공간 인테리어 설계 및 시공(2층)

⇒ 총 7개팀(10인 1팀, 8인 1팀, 7인 1팀, 6인 1팀, 5인 3팀)

바. 환경과 조화를 이룰 수 있는 천정구조로 설계․시공

⇒ 2층 사무실, 9층 교육장 조명 디자인․인테리어 설계․시공

사. 2층 사무실내 회의 공간 등 확보(회의실 4, 탕비실 1, 자료실 1)

아. 환경개선(리모델링) 설계시 반영 할 사항

․실내인테리어(실내바닥, 내벽, 창호), 외부디자인(벽체)

․전기, 통신, 설비, 소방, 방수 등 보수

하. 이외의 열거되지 않은 사항에 대하여는 설계시 변경․추가 가능

※ 발주기관과 계약상대자측과의 협의에 의함

Ⅱ		일반 사항

1. 적용범위

본 과업지시서는 “경기복지미래재단 사무실 환경개선(리모델링)공사”를      수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업 내용서      에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 관련       규정, 제규정 및 지침, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한

후 감독공무원과 협의하여 수행해야 한다.

2. 용어의 정의

가. 발주자

『발주자』라 함은 해당사업의 시행주체인『재단』을 나타내며 수         급인에 대한 계약담당자를 말한다.

나 수급인

『수급인』이라 함은『계약상대자』를 말한다.

다. 감독원

『감독원』이라 함은 수급인이 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록         지휘․감독할 수 있는 자로써 발주처에서 임명․통보한 직원을 말한다.

라. 설계도서

설계도면, 설계내역서, 공사시방서, 구조계산서, 발주자가 특히,            필요하다고 인정하여 요구한 부대도면 및 기타 관련서류를 말한다.

마. 설계도면

과업계획에 의해 제시된 목적물의 형상과 규격 등을 표현하기 위해

수급인에 의해 작성된 도면으로 수량산출 및 내역산출의 기초가          되며 시공자가 시공상세도를 작성할 수 있도록 모든 지침이 표현된

도면을 말하며, 복잡한 부분을 쉽게 판독할 수 있도록 상세히 작성한         상세설계 도면과 구조계산이 필요한 가시설물의 도면을 포함한다.

바. 공사시방서

공사시방서는 표준시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성․         지역여건․공사방법 등을 고려하여 기본 및 실시설계 도면에 구체적

으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의           성능․규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획

등에 관한 사항을 기술하여야 한다.

사. 설계기준서

설계기준서는 설계의 기초가 되는 각종 법령, 규정, 지침, 표준,           규격 및 기준 등의 내용을 종합하여 검토한 후 주요공종을 대상으로

당해설계 수행시에 적용하기로 결정한 기준사항을 명시한 기록을

말한다.

아. “제안요청서”라 함은 계약담당자가 협상에 의한 입찰에 참가하고          자 하는자에게 제안서의 제출을 요청하기 위하여 교부하는 서류          를 말한다.

3. 용어해석의 우선순위

가. 이 과업내용서에 사용된 용어의 해석은 다음 각 호의 1의 순서로          그에 명시된 용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

1) 계약문서(이 과업 내용서를 포함한다)

2) 건축관계법(건축법, 건축사법 등), 동법시행령 및 시행규칙

3) 기타 건설 관련 법규

4) 한국산업규격(KS)

나. 과업내용서상에 용어해석의 차이가 있을 경우에는 감독원과 수급인이          상호 협의하여 결정하여야 한다.

4. 감독의 권한

가. 감 독

감독원은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의        계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에         적극 협조하여야 한다.

나. 기술인력 동원현황

다. 설계도서 작성현황 및 업무수행상태

라. 기타 확인이 필요한 사항

마. 점 검 : 감독원은 품질 확보를 위해 수급인에 대한 정기 또는             수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 수급인은           감독원 지시에 따라 지적사항을 시정하여야 한다.

5. 수급인의 책임

가. 책임한계

1) 감독원의 승인을 받은 설계도서라 할지라도, 수급인의 잘못으로           발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며,           수급인은 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정․보완           요구가 있을 때에는 수급인 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 수급인은 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우              이에 대한 손실보상 등 모든 책임을 져야 한다.

3) 수급인이 감독원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의             제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

나. 지시의 이행

감독원이 용역업무의 수행에 관하여 사업 책임기술자에게 지시부를        통하여 지시한 경우 사업 책임기술자는 지시된 사항의 이행계획서        및 검토보고서를 작성하여 서명 날인한 후 제출하여야 한다.

다. 관계기관 협의

1) 과업수행을 위해 요구되는 각종 인․허가 등을 위하여 감독원이           요구할 시 수급인은 직접 관계기관과 업무협의를 하여야 한다.

2) 수급인은 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료          등에 대하여는 감독원의 승인을 받아야 한다.

3) 수급인은 협의 완료 후 협의 결과를 감독원에게 즉시 보고하여야           하며, 용역 준공시에 회의록 등 회의자료를 정리하여 제출하여야 한다.

라. 공정관리

수급인은 과업 수행시 과업량과 과업기간을 상시 점검․관리하여야

한다.

마. 문서의 기록비치

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의          사항, 감독원의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을        문서로 작성․비치하여야 하며, 감독원의 제출요구가 있을 경우에는        이에 따라야 한다.

바. 재조사

수급인이 본 과업을 수행함에 있어 감독원이 조사과정 및 성과가         부실하여 재조사를 요구할 경우 수급인은 지시에 따라야 하며, 이에        소요되는 비용은 수급인 부담으로 지불하여야 한다.

사. 안전관리의 의무

수급인은 본 과업을 수행하기 위하여 행하는 제반작업 수행시 관련        법규에 의한 안전관리에 최선을 다하여야 하며 작업도중 발생하는        사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

아. 법규 등 준수 의무

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 요구되는 관련법규를 준수하고,        법령 등에 의한 인․허가 업무를 성실히 수행하여야 하며 이와           관련 법령 등의 저촉 또는 미비로 인해 발생하는 모든 피해상황에        대하여 책임을 져야 한다.

6. 주요 업무의 사전승인 등

수급인은 다음 사항에 대해서는 사전에 감독원의 승인을 받고 과업을      수행하여야 한다.

가. 설계계획서 및 착수보고서의 내용변경

나. 설계기준서 작성 또는 변경

다. 주요 설계내용의 변경

라. 자문 및 관계기관과의 협의사항

바. 하도급 등 계약에 관한 사항

사. 기타 감독원이 요구하는 사항

7. 용역수행자의 교체

가. 본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야

하며, 책임기술자 또는 참여하고 있는 건설기술자가 과업 수행에          불성실하거나 부적당하다고 감독원이 인정하는 경우 수급인에게          교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에          따라야 한다.

나. 본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을

수행할 수 없을 때에는 감독원의 승인을 받아 그와 동등 이상의          자격을 갖춘 건설기술자로 즉시 교체하여야 한다.

8. 제안서 관련사항 준수

수급인은 제출한『제안서』내용을 준수하여야 한다. 다만, 불가피한       사유로 인하여 변경코자 할 경우에는 감독원과 사전협의 후 변경하여야      한다. 발주자의 요구 또는 사전협의에 따라 보다 효과적인 사무실         배치를 위해 필요한 제안서 변경의 경우에는 감독원과 사전협의한 것      으로 본다.

9. 제출물

가. 수급인은 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후          서명 또는 날인하여 제출하여야 한다.

나. 감독원은 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출            시기의 변경 또는 본 과업내용서에 명시되지 아니한 제출물의            제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

다. 수급인은 모든 제출물에 대하여 주요한 내용의 변경을 수반하는           사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 재작성하여 제출하여야 한다.

라. 수급인은 과업수행과 관련하여 지자체 또는 관계기관과 협의한            사항에 대하여는 회의록 및 관련자료를 작성 제출하여야 한다.

마. 수급인이 제출한 제출서류가 계약에 위배되는 경우 수급인은 감독원이          검토 승인한 자료를 근거로 책임을 회피할 수 없다.

10. 착수 신고서 제출

본 과업은 계약체결일로부터 7일 이내에 착수하여야 하며, 착수와         동시에 다음의 서류를 즉시 제출하여야 한다.

가. 착수계

나. 책임기술자 선임계

다. 책임기술자 사용인감계

라. 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

마. 분야별 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

바. 예정공정표

사. 보안각서(별지 제1호 서식) 및 보안대책

아. 설계실명제 준수 각서(별지 제2호 서식)

자. 기타 발주자가 요구하는 사항

11. 사업(과업)수행 보고

가. 착수보고

1) 수급인은 현장여건 등을 검토한 후 용역착수 후 5일 이내에 과업           수행에 필요한 세부내용으로 구성된 구체적인 과업 수행계획을           수립․제출하여야 한다.

2) 착수보고는 사업책임기술자가 직접 보고하되 과업수행계획서에는           과업수행에 필요한 제반사항이 빠짐없이 포함되어야 한다.

3) 수급인은 제출한 과업수행계획에 의거 과업내용을 차질없이 수행           해야 하며, 각 단계별 과업수행 내용을 보고하여야 한다.

단, 보고하지 않는 사항에 대하여는 모든 책임은 수급인이 져야           한다.

나. 주간 진도 보고

수급인은 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 진도보고를          매월 말일을 기준으로 다음 달 5일까지 분야별 용역감독원을 경유        하여 서면으로 보고하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 각종 문서수발 현황

3) 과업 수행상 중요 문제점 및 대책

4) 참여기술자 현황

5) 다음 달 사업(과업)수행 계획

다. 중간보고

다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로        하여금 설명토록 하여야 한다.

1) 각 일정 진행단계별 의사결정이 필요한 사항

2) 직접경비 등 비용이 수반되는 사항

3) 설계안의 구획 변경시

4) 주요 마감사항

5) 종합민원실 준공(준공식 등) 계획

6) 주요 단계별 과업 종료시

7) 주요계획 및 방침의 설정과 변경시

8) 감독원이 용역수행상 필요하여 요구시

라. 최종보고 : 준공 5일 전

1) 사무실 시공 및 각종 시설물 설치 완료사항

2) 사무실 준공 사전 검사

12. 설계실명제

가. 수급인은 발주처에서 시행하는 설계실명제가 이행될 수 있도록            다음을 준수해야 한다.

1) 설계실명제 준수각서 제출

2) 본 과업 참여자 기록관리

3) 설계변경 예상목록 작성

4) 공사시행 중 본 과업과 관련하여 발생된 설계변경사항에 대한             공사 감독원의 의견요청 시 의견서 제출

나. 설계변경 예상목록 작성

1) 수급인은 건축설계단계에서 설계반영이 곤란하여 시공 중 불가피           하게 설계변경이 예상되는 사항에 대하여 목록을 작성하고,               감독원의 승인을 받아야 한다.

2) 예상목록 수록내용은 다음과 같다.

- 해당분야

- 설계변경 예상내용

- 설계변경 예상내용의 설계 미반영 사유

- 설계변경 시 착안사항

- 기타 참고사항

다. 설계변경 의견서 제출

수급인은 향후 본 용역성과를 근거로 하여 발주된 공사시행중에          본 건축설계용역과 관련하여 발생된 설계변경사항에 대해 설계변경의        적정성 등에 대한 공사감독원의 설계변경 의견서 제출 요청시 의견을        제출하여야 한다.

1) 설계변경 의견서 제출자

- 당해 설계용역을 수행한 사업책임기술자 및 해당분야 책임기술자

- 사업책임기술자 및 해당분야 책임기술자가 퇴직이나 유고시에는            당해 건축설계용역 업체 대표자

2) 설계변경 의견서 제출 시기

- 수급인은 의견요청서가 접수되는 날로 부터 7일 이내에 의견을            회신하여야 한다.

- 정당한 사유없이 정해진 기한 내에 의견회신이 없는 경우에는             의견서 제출 대상자가 의견요청서 내용을 인정한 것으로 간주한다.

13. 협의와 조정

가. 본 과업을 수행하면서 분야별 책임기술자들은 수시로 회의를 개최          하여 상호간의 의견을 조정하여야 한다.

나. 수급인은 의견 조정시 중요사항은 감독원과 협의하여 결정하여야          하고, 회의록을 작성하고 참석자들의 날인을 받은 후 감독원에게          제출하여야 한다.

14. 설계자문

가. 감독원은 과업수행 중 중요한 사항의 결정을 위해 당해 전문가에게         자문을 받도록 수급인에게 요구할 수 있으며 수급인은 효율적인          설계자문이 될 수 있도록 감독원이 요구하는 시기에 설계자문을          위한 자료를 제출하여야 한다.

나. 수급인은 설계자문결과 제시된 의견에 대해서는 감독원과 협의한          후 설계에 반영하여야 하며 자문결과를 보고서에 기술하여야 한다.

15. 사업(용역)중지

수급인의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 관계기관 협의지연 및 각종      심의신청 기간소요 등으로 인한 용역의 계속 추진이 불가하다고          판단될 경우 감독원은 용역중지를 명할 수 있다.

16. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

수급인은 정부 또는 발주자에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉          되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행          으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

나. 수급인은 보안대책을 수립하여야 하며 착수계와 함께 수급인              보안각서와 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필          서명해야 하며, 용역 참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

다. 사업참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 감독원            승인을 받아야 하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.

라. 수급인은 본 사업의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정          하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

마. 자료보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로           구분하고 정․부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

바. 사업의 정․부책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될            경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때에는          업무일지를 비치하여 작업내용을 기록유지 하여야 한다.

사. 과업성과품 발간 시 유의사항

수급인은 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업 성과물을 감독원과          협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고          대외비로 분류되는 자료의 발간시는 감독원과 협의하여 정부에서          인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

아. 보안관리의 책임

수급인은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다해야 하며 수급인의          과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

자. 수급인은 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 성남시의          사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게          제공 또는 공개해서는 안 된다.

차. 작업장에서 발생되는 원지, 파지, 잉여분 등 과업폐기물은 반드시          소각 또는 분쇄처리 하여야 한다.

카. 매 월별 사업수행자에게 사업 책임기술자가 직접 보안교육을 실시          하여야 한다.

타. 기타 사업 수행과정의 보안사항 이행은 일반적으로 적용되는 보안          사항을 적용 한다

17. 사업(과업)변경

가. 관계법령, 사업방향의 변경 등으로 과업의 범위가 증감될 때 또는         과업수행 중 불가피하게 과업의 변경이 필요하다고 판단될 때는          발주처에 승인 신청하여야 하고, 이에 대하여 발주처가 타당성을          인정할 때와 기타 발주처의 사정에 의해 필요하다고 인정할 때           과업을 변경할 수 있다.

나. 과업수행 중 과업내용의 변경요인이 발생하거나, 계약금액 결정에          명백한 하자 또는 착오를 발견하거나 기타 계약금액의 조정사유가          발생하였을 경우에는 발주처와 별도의 협의 후 정산한다.

다. 본 과업수행 중 관계기관과의 협의 또는 기타 발주처의 필요로            인하여 원활한 과업추진에 지장이 초래될 우려가 있을 시에는            발주처와 협의하여 과업기간을 중지 또는 연장할 수 있다.

라. 과업수행자의 사유에 의하여 과업수행이 지체될 경우 관계법령            에서 정한 비율과 지체일수를 곱하여 지체상환금을 지급액에서           공제한다.

18. 과업(용역)성과품 납품 및 시공

모든 성과품은 “ 발주처”의 사전검토를 받은 후 제출하여야 하며 최종      성과품은 과업 완료일까지 제출한다.

가. 설계 완료보고서(설계도서 및 기타 성과물)

나. 성과품 납품 도서의 종류

성 과 품 종 류	수 량		비 고
	책자 및 도면	CD-ROM
재단 사무실 환경개선(리모델링) 설계		1조	설계완료시
∙설계 설명서	3부
∙설계원도(A1, CAD포함)	1부
∙공사시방서	3부
∙내역서 (A4, 내역서, 일위대가 등)	3부
∙수량산출조서 (A4)	3부
∙설계도면 (A3,백도)	3부
재단 사무실 환경개선(리모델링) 시공․설치			공사시행

※ 발주처의 방침 등에 따라 성과품 종류 및 시공방법이 변경 될 수 있음.

Ⅲ		과업수행 세부지침

1. 과업수행 기본방향

가. 경기복지미래재단의 미션과 비전을 반영한 최첨단 기술을 활용한          연구와 교육, 행정이 공존할 수 있는 경기도만의 특색있는 사무실          및 교육장 환경을 조성하여야 한다.

나. 사무실 내부 공간은 부서별 상호간 이용 편의를 우선적으로 고려          하여 직원들의 업무처리 동선등 고려하여야 한다.

다. 교육장 이용 교육생들에 대한 편리성을 충분히 감안하여 필요한           설비 및 시설의 기능을 발휘할 수 있도록 하여야 한다.

라. 사무실의 전체적인 디자인, 인테리어, 첨단조명을 이용하여 밝고           깨끗한 분위기를 연출하고 공간 활용을 극대화 할 수 있도록             하여야 한다.

바. 인테리어 등은 수급자가 제시한 시설기준 중 최고 등급인 Aa 등          급으로 설계․시공되도록 하여야 한다.

사. 감독원은 설계된 디자인이 타 업체가 수행한 동급디자인에 비해          질과 내용면에서 미흡하다고 판단되면 재설계를 지시할 수 있으며,         이 경우 수급인은 감독원에게 재설계물을 제시하여 선정된(안)으로         시공 완료하여야 한다. 이에 소요되는 경비와 계약에 따른 지체         상환금 등은 수급자가 부담으로 한다.

자. 수급자는 디자인, 인테리어, 건축, 전기, 통신, 소방 분야 설계            진행시 우리재단의 전문분야 공무원 또는 감독원은 의견을 충분          히 수렴․반영 하여야 한다.

2. 사무실(2층) 공간 구성(안)

구 분	규 격(기준)	주요 내용
■ 사무실 출․입구	○ 수량 : 3개소	① 기존 출입구를 전체적인 공용 공간과의 조화로운 디자인과 직원들의 편리성 고려 ② 기관장 전용 출입구를 고려한 설계 ․시공
■ 사무실 바닥	○ 면적 : 574.6㎡	① 깨끗하고 밝은 환경을 고려한 바닥재 등으로 설계 ․시공 ② 장기간 원형 유지가 가능하고 청소등 관리가 용이한 자재 ③ 직원 업무공간과 기관장 집무 공간을 구분하여 자재 사용 가 능
■ 사무실 천정	○ 면적 : 574.6㎡	① 천정 누수 보수공사 반영 ② 조명과 어우러지는 천정시공 자재를 사용
■ 사무실 벽면	○ 사무실 전체	① 기존 콘크리트 벽면의 문제점 을 보완하여 우드톤의 인테리어 설계 ․시공 ② 전체 사무실 환경을 고려한 디자인과 이미지 연출 검토
■ 탕비실(식수 공급)	○ 규 격 : 2 x 1.5m이내 ○ 수 량 : 1개소	① 사무실 운영에 필요한 탕비실 설계․시공
■ 자료실(보관공간)	○ 규 격 : 3x3m이내 ○ 수 량 : 1개소	① 사무실 업무관련 전산소모품, 복사지등 보관을 위한 공간 확보
■ 업무 회의공간	○ 규 격 : 2.3 x 2m내외 ○ 수 량 : 4개소 ○ 회의인원 : 4명이상	① 회의에 필요한 공간 확보 ② 회의실내 환경과 조화를 이룰 수 있는 조명과 인테리어
■ 기관장 집무실	○ 면 적 : 전체적인 사무 공간을 고려한 별도 설정 ○ 수 량 : 1개소	① 특색 있는 디자인과 기관장에 맞는 고품스러운 인테리어를 구성 ② 전용 출입로와 화장실 이용이 용이하게 구성
■ 대표이사실	○ 규 격 : 5.7 x 3.9m이내 ○ 수 량 : 1개소	① 기관장실과 근접하여 이동이 용이하게 구성
■ 임원실	○ 규 격 : 2.8 x 2m이내 ○ 수 량 : 2개소
■ 부서별 업무 공간

3. 사무실(9층) 공간 구성(안)

구 분	규 격(기준)	주요 내용
■ 교육생 대기 공간	○ 설치규모 : 좌석 20개 이상 ○ 설비 및 장비 - 소형의자(별도구매) - 대형T.V설치(별도구매) ○ 인원 : 50명이상 공간	① 교육생들의 이용 편의를 최우 선적으로 고려 ② 교육장 전체적인 공간과 조화 를 이룰 수 있는 디자인과 인테 리어 설계․시공 ③ 정감있는 휴게공간으로 설계․시공
■ 강사 대기 공간	○ 면 적 : 2x1.6m내외 ○ 수 량 : 1개소 - 쇼파 : 3인용 - 탁자 : 1개 (별도구매)	① 강사들의 사용 편의 우선 고려
■ 교육 업무 공간	○ 면 적 : 5 x 10m정도 ○ 근무인원 : 5명이상	① 교육장과 유기적인 업무가 이 루어 질수 있도록 배치
■ 탕비실(직원용)	○ 규 격 : 1.5x1.5m이내 ○ 수 량 : 1개소	① 교육 업무 운영에 필요한 탕비 실 설계․시공
■ 자료실(보관공간)	○ 규 격 : 2x3m이내 ○ 수 량 : 1개소	① 교육장 운영 업무관련 전산소 모품, 행사용품등 보관을 위한 공 간 확보
■ 교육장	○ 규 격 : 좌석 80석 이상	① 전면에 15㎝ 강단 설치 ② 전면 중앙에 대형 화이트보드 설치 ③ 전면 양사이드에 롤스크린 설치 ④ 첨단 교육장에 걸맞는 공간디자 인과 인테리어 설계‧시공
■ 9층내 각종 설비	○ 냉방기 3대, 음향장비 1세트, 프로젝트 빔 1대, 책상 20개, 의자 50개	① 재사용이 가능한 시설물(설비) 에 대하여는 교육장 환경을 고려한 비 노출 설계(냉방기) ② 기존 교육장내 책상 등 집기 재사용

※ 구성 내역은 업체에서 제안하여 상호 협의한 대로 시행하되 누락된

부분에 대하여는 설계시에 추가로 반영함.

[별지 제1호 서식]

보 안 각 서

(수급인용)

본인은     년     월    일 경기복지미래재단과 계약 체결한 “경기복지미래재단 사무실 환경개선(리모델링)사업” 을 시행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 사업을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안  사항을 철저히 이행할 것임은 물론 사업 수행 전에 사업참여자에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 사업시행부서에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 당 회사 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기했을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론 회사에 대한 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임

년    월    일

소속 :

직위 :

성명 :                  (인)

( 계약시 사용인장을 사용할 것 )

경기복지미래재단 이사장 귀하

[별지 제2호 서식]

보 안 각 서

(사업 참여자용)

본인은     년     월    일 경기복지미래재단과 계약 체결한 “경기복지미래재단 사무실 환경개선(리모델링)사업” 을 시행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 사업을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안  사항을 철저히 이행할 것임.

2. 보안사항을  외부에  누설시켜 문제점을 야기했을 경우에는 보안관계

제법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임

년    월    일

소속 :

직위 :

성명 :                  (인)

경기복지미래재단 이사장 귀하

[별지 제3호 서식]

설계 실명제 준수 각서

사 업 명  : 경기복지미래재단 사무실 환경개선(리모델링)사업

본인 및 과업종사자들은 상기 용역과업을 수행함에 있어 과업내용서에 정한 설계실명제 관련 사항을 성실히 준수할 것을 서약하며 이에 각서를 제출합니다.

년     월     일

주    소 :

상    호 :

대표자 성    명 :                    (인)

경기복지미래재단 이사장 귀하